구 분	관리번호	공약사업	담당부서	상하수도과 상수도담당 (담당자 홍순일, 7011)
	5-7
추진실적 (기준일)	70%(정상추진) (2025. 1월 기준)		완료예상	2026년 12월
			목표달성여부	여

상수도 시설 확충

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2017. 1. ~ 2026. 12.

❍ 위       치: 산청군 일원

❍ 총 소요예산: 금86,008백만원(국비 39,428, 도비 30,355, 군비 16,225)

- 단성급수구역: 19,360백만원

- 시천급수구역: 10,000백만원

- 삼장지구 인입공사(2공구): 10,900백만원

- 단성급수구역 비상공급망 구축사업: 11,348백만원

- 산청·생초 통합정수장 증설 및 지방상수도 확장사업: 24,400백만원

※ 산청급수구역(오부·금서지구) 준공완료(10,000백만원)

❍ 사 업 내 용

- 정수장증설(시천, 산청・생초), 배수지 설치(삼장), 관로매설 L=120km,

- 비상공급망 구축, 가압장 및 감압변 1식 등

□ 주요 추진사항

❍ 삼장2지구(3차분) 공사 착공                          : 2022.  7월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신등지구) 공사 착공         : 2022.  7월

❍ 산청생초지구(산청·생초정수장) 설계용역 착공        : 2022. 11월

❍ 단성정수장증설(5,700톤) 준공                         : 2022. 12월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신안지구) 공사 착공         : 2023.  6월

❍ 단성정수장증설(단성·신안지구) 공사 착공            : 2023.  6월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신등지구) 준공              : 2023.  8월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신안지구) 2차분 착공        : 2023. 10월

❍ 산청생초지구(산청·생초정수장) 경제성검토           : 2023. 12월

❍ 시천급수구역(시천정수장증설) 착공                   : 2024.  1월

❍ 시천급수구역(시천정수장증설) 건설사업관리용역 착공  : 2024.  1월

❍ 시천급수구역(비상취수원신설) 착공                   : 2024.  3월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신안지구) 준공              : 2024.  5월

❍ 산청생초지구(산청·생초정수장) 건설기술심의 협의    : 2024.  6월

❍ 삼장지구 지방상수도 인입공사 전체 준공              : 2024.  6월

❍ 산청생초지구(산청·생초정수장) 조달청 계약 의뢰     : 2024. 10월

❍ 산청생초지구(산청·생초정수장) 사업수행능력평가     : 2024. 12월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
86,008	86,008	43,310	100,970	24,968	59,400	16,602	-	58,272	3,560	43,785	10,927	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	86,008	42,698	8,784	8,784	12,871	12,871	-	-
국비	39,428	21,408	-	-	9,010	9,010	-	-
도비	30,355	15,615	5,440	5,440	1,930	1,930	-	-
군비	16,225	5,675	3,344	3,344	1,931	1,931	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
상수도 시설 확충	합계	58,272	24,161	14,752	5,662	18,361	11,348	16,713	7,151	8,446	-
	국비	3,560	3,560	2,660	1,379	900	2,181	-	-	-	-
	도비	43,785	15,853	9,652	2,678	14,022	7,176	12,931	5,999	7,180	-
	군비	10,927	4,748	2,440	1,605	3,439	1,991	3,782	1,152	1,226	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 산청․생초지구(산청․생초 정수장) 착공	: 2025.  1월

❍ 산청․생초지구(산청․생초 정수장) 건설사업관리용역 착공	: 2025.  1월

❍ 차황급수구역 실시설계용역 착공	: 2025.  3월

❍ 단성급수구역(입석지구) 실시설계용역 착공	: 2025.  3월

❍ 시천급수구역(시천정수장증설) 전체 준공	: 2025.  6월

❍ 산청․생초지구(산청․생초 정수장) 전체 준공	: 2026. 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	상하수도과 상수도담당 (담당자 홍순일, 7011)
	5-7
추진실적 (기준일)	70%(정상추진) (2024. 6월 기준)		완료예상	2026년 12월
			목표달성여부	여

상수도 시설 확충

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2017. 1 ~ 2026. 6.

❍ 위       치: 산청군 일원

❍ 총 소요예산: 금86,008백만원(국비 39,428, 도비 30,355, 군비 16,225)

- 단성급수구역: 19,360백만원

- 시천급수구역: 10,000백만원

- 삼장지구 인입공사(2공구): 10,900백만원

- 단성급수구역 비상공급망 구축사업: 11,348백만원

- 산청·생초 통합정수장 증설 및 지방상수도 확장사업: 24,400백만원

※ 산청급수구역(오부·금서지구) 준공완료(10,000백만원)

❍ 사 업 내 용

- 정수장증설(시천, 산청・생초), 배수지 설치(삼장), 관로매설 L=120km,

- 비상공급망 구축, 가압장 및 감압변 1식 등

□ 주요 추진사항

❍ 삼장2지구(3차분) 공사 착공                          : 2022.  7월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신등지구) 공사 착공         : 2022.  7월

❍ 산청생초지구(산청·생초정수장) 설계용역 착공        : 2022. 11월

❍ 단성정수장증설(5,700톤) 준공                         : 2022. 12월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신안지구) 공사 착공         : 2023.  6월

❍ 단성정수장증설(단성·신안지구) 공사 착공            : 2023.  6월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신등지구) 준공              : 2023.  8월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신안지구) 2차분 착공        : 2023. 10월

❍ 산청생초지구(산청·생초정수장) 경제성검토           : 2023. 12월

❍ 시천급수구역(시천정수장증설) 착공                   : 2024.  1월

❍ 시천급수구역(시천정수장증설) 건설사업관리용역 착공  : 2024.  1월

❍ 시천급수구역(비상취수원신설) 착공                   : 2024.  3월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신안지구) 준공              : 2024.  5월

❍ 산청생초지구(산청·생초정수장) 건설기술심의 협의    : 2024.  6월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
86,008	86,008	43,310	92,524	24,968	52,220	15,336	-	49,826	3,560	36,605	9,661	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	86,008	42,698	8,784	8,784	12,871	12,871	-	-
국비	39,428	21,408	-	-	9,010	9,010	-	-
도비	30,355	15,615	5,440	5,440	1,930	1,930	-	-
군비	16,225	5,675	3,344	3,344	1,931	1,931	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
상수도 시설 확충	합계	49,826	24,161	14,752	5,662	18,361	11,248	16,713	7,251
	국비	3,560	3,560	2,660	1,379	900	2,181
	도비	36,605	15,853	9,652	2,678	14,022	7,176	12,931	5,999
	군비	9,661	4,748	2,440	1,605	3,439	1,991	3,782	1,152
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 산청․생초지구(산청․생초 정수장) 착공	: 2024.  9월

❍ 산청․생초지구(산청․생초 정수장) 건설사업관리용역 착공  : 2024. 10월

❍ 시천급수구역(시천정수장증설) 전체 준공               : 2025.  6월

❍ 산청․생초지구(산청․생초 정수장) 전체 준공	: 2026. 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	상하수도과 상수도담당 (담당자 홍순일, 7011)
	5-7
추진실적	70% (정상추진)		완료예상	2026년 6월
			목표달성여부	여

상수도 시설 확충

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2017. 1 ~ 2026. 6.

❍ 위       치: 산청군 일원

❍ 총 소요예산: 금86,008백만원(국비 39,428, 도비 30,355, 군비 16,225)

- 단성급수구역: 19,360백만원

- 시천급수구역: 10,000백만원

- 삼장지구 인입공사(2공구): 10,900백만원

- 단성급수구역 비상공급망 구축사업: 11,348백만원

- 산청·생초 통합정수장 증설 및 지방상수도 확장사업: 24,400백만원

※ 산청급수구역(오부·금서지구) 준공완료(10,000백만원)

❍ 사 업 내 용

- 정수장증설(시천, 산청・생초), 배수지 설치(삼장), 관로매설 L=120km,

- 비상공급망 구축, 가압장 및 감압변 1식 등

□ 주요 추진사항

❍ 삼장2지구(3차분) 공사 착공                        : 2022.  7월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신등지구) 공사 착공       : 2022.  7월

❍ 산청생초지구(산청·생초정수장) 설계용역 착공      : 2022. 11월

❍ 단성정수장증설(5,700톤) 준공                       : 2022. 12월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신안지구) 공사 착공       : 2023.  6월

❍ 단성정수장증설(단성·신안지구) 공사 착공          : 2023.  6월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신등지구) 준공            : 2023.  8월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신안지구) 2차분 착공      : 2023. 10월

❍ 산청생초지구(산청·생초정수장) 경제성검토         : 2023. 12월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
86,008	86,008	43,310	92,524	24,968	52,220	15,336	-	49,826	3,560	36,605	9,661	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	86,008	42,698	8,784	8,784	12,871	12,871	-	-
국비	39,428	21,408	-	-	9,010	9,010	-	-
도비	30,355	15,615	5,440	5,440	1,930	1,930	-	-
군비	16,225	5,675	3,344	3,344	1,931	1,931	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
상수도 시설 확충	합계	49,826	18,769	14,752	8,361	18,361	10,408	16,713	-
	국비	3,560	3,720	2,660	1,379	900	2,341		-
	도비	36,605	10,773	9,652	4,597	14,022	6,1764	12,931	-
	군비	9,661	4,276	2,440	2,385	3,439	1,891	3,782	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 시천급수구역(시천정수장증설) 착공                    : 2024.  1월

❍ 시천급수구역(시천정수장증설) 건설사업관리용역 착공   : 2024.  1월

❍ 시천급수구역(비상취수원신설) 착공                    : 2024.  3월

❍ 산청생초지구(산청·생초정수장) 건설기술심의 협의     : 2024.  5월

❍ 삼장 2공구 전체 준공                                : 2024.  5월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신안지구) 준공               : 2024.  6월
❍ 산청․생초지구(산청․생초 정수장) 착공	: 2024.  8월

❍ 산청․생초지구(산청․생초 정수장) 건설사업관리용역 착공  : 2024. 10월

❍ 시천급수구역(시천정수장증설) 전체 준공               : 2025.  6월

❍ 산청․생초지구(산청․생초 정수장) 전체 준공	: 2026.  6월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	상하수도과 상수도담당 (담당자 김종현)
	5-7
추진실적	35% (정상추진)		완료예상	2025년
			목표달성여부	여

상수도 시설 확충

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2017 ~ 2025년

❍ 위    치 : 산청군 일원

❍ 소요예산 : 86,008백만원(국비 39,428, 도비 30,355, 군비 16,225)

❍ 사업내용

- 정수장증설(단성,시천,산청·생초), 배수지(오부,삼장),

- 관로매설 L=220km, 가압장 및 감압변 설치 등

□ 추진사항

❍ 산청급수구역(금서) 착공                              : 2021.   4월

❍ 산청급수구역(오부) 착공                              : 2021.   5월

❍ 단성정수장 증설 3차분 착공                          : 2022.   1월

❍ 삼장2지구(3차분) 착공                                : 2022.   6월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신등지구) 착공               : 2022.   6월

❍ 산청급수구역(오부) 준공 완료                         : 2022.   9월

❍ 산청생초지구(산청생초정수장) 설계용역 착공           : 2022.  11월

❍ 단성정수장 증설(3차분) 준공 완료                     : 2022.  12월

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후	비고
		기 확보예산 ( ~2022년 )	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년이후
계	86,008	51,482	8,784	12,871	12,871
국비	39,428	21,408		9,010	9,010
도비	30,355	21,055	5,440	1,930	1,930
군비	16,225	9,019	3,344	1,931	1,931
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 사전 행정절차를 조속히 처리하여 사업 발주

□ 향후 추진계획

❍ 시천급수구역(시천정수장) 착공                        : 2023.  2월

❍ 산청급수구역(금서) 준공                              : 2023.  3월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신등지구) 준공               : 2023.  9월

❍ 삼장2지구(3차분) 준공                                : 2023.  11월

❍ 산청·생초지구(산청·생초정수장) 설계용역 준공       : 2023.  11월

❍ 시천급수구역(시천정수장) 준공                        : 2024.  12월